[별지 6]

개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

남해추모누리 장사시설 확충

담당자

주민복지과 최영훈(☎3853)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장사시설의 확충 및 개선을 통해 증가하는 화장수요에 대응하고 화장시설

증축에 따라 이용객들에게 편리하고 쾌적한 장사서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.3월 ~ 2019.6월

○ 위 치 : 남해군 서면 연죽로 46-77 남해추모누리

○ 규 모 : 화장로 1기 증설, 화장로 2기 개보수, 증축(212㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,221백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,221	714	1,507
국 비	813	444	369
시 도 비
시군구비	1,408	270	1,138
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘18. 3월 : 실시설계용역 및 재정투자심사 완료

○ ‘18. 7월 : 공사 계약

○ ‘18. 8월 : 사업 착공

○ ‘19. 6월 : 사업 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비변경                                        (단위 : 백만원)

당초	현재	비고
2,204	2,221

사업명

어린이집 확충

담당자

주민복지과 정연주(☎860-3848)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국공립어린이집 신축을 통한 쾌적하고 안전한 보육 환경 조성 및 공공 보육서비스 강화를 통한 아이 키우기 좋은 남해 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 2월 ~ 2121. 4월

○ 위 치 : 남해군 남해읍 서변리 376 외 5필지

○ 규 모 : 914.55㎡/지상 2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,867백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,867		67	2,800
국 비	647			647
시 도 비	323			323
시군구비	597		67	530
지 방 채
민간자본	1,300			1,300
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 지방재정 투자심사 반영 : 2018. 11월

○ 신축 부지 매입 : 2019. 9월

○ 신축 협약 체결(남해군-하나금융공익재단-푸르니보육지원재단) : 2019. 10월

○ 기본·실시설계 : 2020. 2월

□ 향후계획

○ 착공 및 준공 : 2020. 9월 ~ 2021. 4월

○ 기자재 구입 및 개원 준비 : 2021. 5월

□ 사업변경 내역(해당시)

구분	변경 전	변경 후
사업규모	996㎡	914.55㎡
총사업비	3,080	2,867
사업기간	2019.1월 ~ 2020.12월	2020.2월 ~ 2021.4월

사업명

남해군청소년수련관건립사업

담당자

청년혁신과 조나진(☎860-8643)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해군 청소년들에게 다양한 문화‧예술‧체육활동 지원으로 건강한 청소년 문화를 정립하고 남해군 지역청소년 정책의 중추적 역할 수행과 복지 증진에 기여할 수 있는 청소년수련관 건립코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 남해군 남해읍 북변리 339 일원

○ 규 모 : 연면적 4,613㎡(지하1층 지상4층)

- 주요시설 : 실내집회장(공연장 200석규모), 다목적실내체육공간,

상담실, 지도자실, 휴게실, 동아리방, 크리에이터실, 미디어센터(특화)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 138백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	13,800	-	1,800	750	11,250
국 비	9,600	-	-	600	9,000
시 도 비
시군구비	4,200	-	1,800	150	2,250
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 남해생활SOC 복합화 사업의 연계사업을 추진 : 19. 6월

○ 중앙투자심사 조건부 승인 : 2019. 10. 22.

○ 청소년수련관 건립심의위원회 구성 : 2020. 3월

○ 남해생활SOC 설계공모관리용역 : 2020. 3월

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 시행 : 2020. 11월

○ 건립공사 준공 : 2022. 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 남해생활SOC 복합화 사업의 연계사업으로 추진 중

사업명

어촌뉴딜 300사업(동갈화항)

담당자

지역활성과 정상훈(☎860-3614)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌이 보유한 핵심자원을 활용하여 차별화된 콘텐츠를 발굴하고 어촌·어항 통합개발을 통하여 사업효과 극대화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 남해군 고현면 갈화리 동갈화항 일원

○ 규 모 : 새우맞이길, 새우만남의 광장 조성, 웰리스광장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,640백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,640		2,264	3,081	1,295
국 비	4,528		1,585	2,037	906
시 도 비	582		204	262	116
시군구비	1,359		475	611	273
지 방 채
민간자본
기 타	171			171

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2019. 9월 : 기본계획 승인 및 고시

○ 2019. 9월 : 1차분 시행

○ 2020. 2월 : 새우만남의길 외 1개소 조성공사 착수

□ 향후계획

○ 2021. 12월 : 사업준공

□ 사업변경 내역

○ “해당없음”

사업명

어촌뉴딜300사업(상주항)

담당자

지역활성과 김태석(☎860-3612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌이 보유한 핵심자원을 활용하여 차별화된 콘텐츠를 발굴하고 어촌·어항 통합개발을 통하여 사업효과 극대화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 남해군 상주면 상주항·금전항 일원

○ 내 용 : 해양레저공간 조성, 금전항 어항기능 보강, 천연해수풀장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,937백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,937			2,409	7,528
국 비	6,746			1,686	5,060
시 도 비	867			217	650
시군구비	2,024			506	1,518
지 방 채
민간자본
기 타	300				300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 12월 : 어촌뉴딜 300사업 공모 선정

○ 2020.  2월 : 업무 일괄 위·수탁 협약(남해군↔한국어촌어항공단)

○ 2020.  5월 : 기본계획 수립용역 착수

□ 향후계획

○ 2020.  9월 : 기본계획 수립 1차 협의(경남도, 해수부)

○ 2020. 12월 : 기본계획 승인 및 고시

○ 2021.  1월 ~ 2022.  6월 : 시행계획 수립용역

○ 2021.  7월 ~ 2022. 12월 : 공사 착수 및 준공

□ 사업변경 내역

○ “해당없음”

사업명

어촌뉴딜300사업(지족항)

담당자

지역활성과 김태석(☎860-3612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌이 보유한 핵심자원을 활용하여 차별화된 콘텐츠를 발굴하고 어촌·어항 통합개발을 통하여 사업효과 극대화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 남해군 삼동면 지족항 일원

○ 내 용 : 선셋다기능센터, 어항시설 보강, 중심가로 정비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,357백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,357			1,827	5,530
국 비	5,115			1,279	3,836
시 도 비	658			164	494
시군구비	1,534			384	1,150
지 방 채
민간자본
기 타	50				50

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 12월 : 어촌뉴딜 300사업 공모 선정

○ 2020.  2월 : 업무 일괄 위·수탁 협약(남해군↔한국어촌어항공단)

○ 2020.  5월 : 기본계획 수립용역 착수

□ 향후계획

○ 2020.  9월 : 기본계획 수립 1차 협의(경남도, 해수부)

○ 2020. 12월 : 기본계획 승인 및 고시

○ 2021.  1월 ~ 2022.  6월 : 시행계획 수립용역

○ 2021.  7월 ~ 2022. 12월 : 공사 착수 및 준공

□ 사업변경 내역

○ “해당없음”

사업명

수산식품산업거점단지조성사업

담당자

해양수산과 박병선(☎860-3362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역별 풍부한 수산자원을 활용하여 고부가가치 수산식품산업 및 지역        특화산업의 전략적 육성을 위한 거점단지조성

○ 수산물가공시설 냉동.냉장시설 등 복합시설확충을 통한 고품질의 수산제품       생산·판매 등으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2019년

○ 위 치 : 남해군 미조면 미조리 168-21번지외 1

○ 규 모 : 거점센터1동(지하1층,지상3층) 6,850.69㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,666백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	14,666	6,959	7,707	-	-
국 비	7,333	3,578	3,755	-	-
시 도 비	1,759.92	858	901.92	-	-
시군구비	4,106.48	2,003	2,103.48	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,466.60	520	946.6	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016. 01. 29. : 기본계획 승인(해수부 승인)

○ 2017. 11. 16. : 투융자심사(제1, 4차 중앙투자심사)

○ 2017. 11. 20. : 기본 및 실시설계(조달청 설계 적정성 검토완료)

○ 2018. 02. 26. : 착공

○ 2019. 09. 30. : 준공

□ 향후계획

○ 수산식품거점단지 생산·가공·판매제품의 안정적 판로기반 확보 및 수산       식품의 원활한 공급 도모

사업명

염해지구 연안전비

담당자

해양수산과 권우종(☎860-3372)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기후변화에 따른 해일, 파랑 또는 연안침식 등으로부터 연안을 보전하고

자연재해 사전 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2020

○ 위 치 : 남해군 서면 남상리 염해항 일원

○ 규 모 : 이안제 L=150m, 파라펫 L=255m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,000	154	1,583	2,263
국 비	2,800	108	1,108	1,584
시 도 비	360	14	142	204
시군구비	840	32	332	475
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 10 : 실시설계 착수

○ 2019.  7 : 공사 착수

○ 2020.  6 : 공사 준공

□ 향후계획

○ 수시·정기점검 및 시설물 유지관리 추진

사업명

설리지구 어촌뉴딜사업

담당자

해양수산과 권우종(☎860-3372)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌과 어항의 현대화를 통해야 해양관광 활성화를 도모하고 살기좋은

어촌마을 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2021

○ 위 치 : 남해군 미조면 송정리 설리항 일원

○ 규 모 : 방파제 L=150m, 어구보관창고 및 쉼터, 계류시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	15,000		573	9,582	4,845
국 비	10,500		401	6,707	3,392
시 도 비	1,350		52	863	435
시군구비	3,150		120	2,012	1,018
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2018. 12 : 공모사업 확정

○ 2019.  4 : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2019. 12 : 기본계획 승인

○ 2020.  5 : 어항공단 위수탁협약(계류시설, 마을경관 특화 등)

□ 향후계획

○ 2020. 11 : 공사 착수

○ 2021. 12 : 공사 완료

사업명

피셔리나항 개발사업

담당자

해양수산과 허치도(☎860-3372)

□ 사업목적 및 필요성

○ 요트 계류시설 등 해양레포츠 기반시설 구축을 통해 해양레저산업

활성화를 도모하고 관광자원으로 활용하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2021

○ 위 치 : 남해군 창선면 진동리 적량항 일원

○ 규 모 : 계류시설, 클럽하우스, 상·하가 시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000		99	1,901
국 비	1,000		45	955
시 도 비	300		13	287
시군구비	700		41	659
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2019. 7 : 실시설계용역 착수

○ 2020. 5 : 공사 착수

□ 향후계획

○ 2021. 5 : 공사 준공

사업명

보물섬 해안조망 실크로드 조성사업

담당자

도시건축과 이석우(☎3073)

□ 사업목적 및 필요성

○ 특색있는 경관조명시설 구축을 통한 지역관광산업 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016 ~ 2020(5년)

○ 위  치 : 남해군 미조면 송정리 산352-4일원, 삼동면 물건리 산271-3번지

○ 사업량

- 설리지구 : 스카이워크, 포토존, 농수산물 전시 및 판매장, 주차장 등

- 대지포지구 : 조망공간 1개소(익스트림 스포츠시설, 소매점, 카페테리아)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  11,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	11,700	2,085	7,115	2,500
국 비	4,600	1,043	3,557	-	-
시 도 비	1,380	312	1,068	-	-
시군구비	5,720	730	2,490	2,500	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ’13. 07월 : 기본계획 완료 및 지방재정투융자사업심사 승인

○ ’15. 07. 29 : 실크로드 조성사업 기획재정부 2차 심의 확정

○ ‘17. 12월 : 대지포지구 공사 계약 체결 및 사업착공

○ ’18. 06. 11 : 설리지구 공사계약체결(구백종합건설) 및 공사착공

○ ‘19. 08월 : 대지포지구 사업준공

○ ‘20. 08월 : 설리지구 사업준공

□ 향후계획

○ 설리지구 및 대지포지구 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역(해당시)

	총사업비	사업기간	사업위치	비고
당초	92억	2016 ~ 2019	설리, 대지포, 상주
변경	117억	2016 ~ 2020	설리, 대지포

사업명

군도2호선 용강~덕신 확포장공사

담당자

건설교통과 조성제(☎860-3313)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로의 교통망 확충으로 기존 도로의 굴곡을 개량하여 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2020년(5년)

○ 위 치 : 남해군 설천면 덕신리 일원

○ 규 모 : 도로 확포장 L=2.0㎞, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,105백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,105	375	616	114
국 비
시 도 비	300		300
시군구비	805	375	316	114
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 3월 : 공사착공

○ 2020. 5월 : 공사준공

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	현 재	비 고
총사업비	3,800	1,105
사업기간	2017 ~ 2018	2016 ~ 2020
사업규모	도로확장 L=2.0㎞	도로확장 L=1.34㎞

사업명

농어촌도로(삼동면211호선)개설공사

담당자

건설교통과 조성제(☎860-3313)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로의 교통망 확충으로 도로를 개설하여 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2019년(4년)

○ 위 치 : 남해군 삼동면 은점마을 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=0.87㎞, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,269백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,269	1,976	228
국 비
시 도 비
시군구비	2,269	2,041	228
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 5월 : 공사착공

○ 2019. 2월 : 공사준공

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	현 재	비 고
총사업비	2,600	2,269
사업기간	2015 ~ 2018	2016 ~ 2019
사업규모	도로개설 L=0.9㎞	도로개설 L=0.87㎞

사업명

남해대교 경관조명 설치사업

담당자

건설교통과 조성제(☎860-3313)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새로운 야간경관 조명을 설치하여 남해군의 랜드마크로서 침체된 노량권역

활성화를 통한 관광객 유치 및 지역경제활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2020년

○ 위 치 : 남해군 설천면 노량리 남해대교 일원

○ 규 모 : 조명설비 1식(투광등 : LED 150W 52set, LED 200W 12set)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 177백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	177			177
국 비
시 도 비
시군구비	177			177
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 7월 : 실시설계 용역착수

□ 향후계획

○ 2020.  8월 : 실시설계 용역완료

○ 2020.  9월 : 공사착공

○ 2020. 11월 : 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	현 재	비 고
총사업비	2,000	177
사업기간	2019 ~ 2019	2019 ~ 2020
사업규모	조명공사 1식(L=660m)	투광등 64set

사업명

복곡~내산 간 도로개설공사

담당자

건설교통과 조성제(☎860-3313)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주변지역의 접근성 개선으로 이동면과 삼동면의 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2025년(6년)

○ 위 치 : 남해군 이동면 복곡 ~ 삼동면 내산

○ 규 모 : 도로개설 L=3.5㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	5,000		95	595	4,310
국 비	2,000				2,000
시 도 비
시군구비	3,000		95	595	2,310
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 2019.  9월 : 기본 및 실시설계 용역 사업수행능력평가

○ 2019. 11월 : 실시설계 용역착수

□ 향후계획

○ 2021.  5월 : 지역개발사업 공모 신청

○ 2022.  1월 : 편입 토지 측량 및 보상

○ 2022.  8월 : 행정절차 이행(지역개발사업구역 지정, 실시계획 승인 등)

○ 2022.  9월 : 공사착공

○ 2025. 12월 : 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

농어촌도로(창선면204)개설공사

담당자

건설교통과 조성제(☎860-3313)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국도3호선의 통행량을 분산하여 교통흐름 개선 및 해안도로 개설을 통한

관광자원화 기반시설 확충으로 주민소득창출 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2022년(5년)

○ 위 치 : 남해군 창선면 지족리 ~ 당저리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1.1㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,000	155	345	500	2,000
국 비
시 도 비	200				200
시군구비	2,800	155	345	500	1,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)

○ 2018.  6월 : 실시설계 완료

○ 2018.  8월 : 편입 토지 측량 및 보상

□ 향후계획

○ 2021.  2월 : 공사착공

○ 2022. 12월 : 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

농어촌도로(창선면207)개설공사

담당자

건설교통과 조성제(☎860-3313)

□ 사업목적 및 필요성

○ 창선면 교통체증을 분산하고 관광객 및 지역주민에게 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2022년(5년)

○ 위 치 : 남해군 창선면 상신리 ~ 오용리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1.9㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,500	218	94	1,088	2,100
국 비
시 도 비	200	150			50
시군구비	3,300	68	94	1,088	2,050
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 9%)

○ 2018.  6월 : 실시설계 완료

○ 2018.  8월 : 편입 토지 측량 및 보상

□ 향후계획

○ 2021.  8월 : 공사착공

○ 2022. 12월 : 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

남해읍 공영주차장 조성사업

담당자

건설교통과 박봉인(☎860-3454)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해읍 공동주택 신축 급증, 남해전통시장 이용객 증가, 주말행사시 공영시외버스터미널 인근 불법 주정차 문제등 주차수요 및 지역생활 환경개선을 위한 공영주차장 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 2021. 5월

○ 위 치 : 남해군 북변리 266-6번지 일원

○ 규 모 : 주차장 조성 1식(A=9,430㎡, 주차면수 : 231면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,300	2,784	2,476	1,692	348
국 비	3,000	749	2,001	250	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	4,300	2,035	475	1,442	348
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2017년 5월 : 도 지방재정투자심사 조건부 승인

○ 2020년 6월 : 주차장 조성사업 실시설계 준공

○ 2020년 7월 : 주차장 조성사업 착공

□ 향후계획

○ 2021년 5월 : 주차장 조성사업 준공

○ 2020년 5월 : 위탁관리에 의한 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 부지매입비 증가로 사업비 증가( 6,000백만→ 7,300백만)

사업명

창선 단항 공영주차장 조성사업

담당자

건설교통과 박봉인(☎860-3454)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사천바다케이블카 개통으로 관광객이 급증함에 따라 창선대교타운을 찾는 관광객 주차 편의 조성

○ 주차뿐만 아니라 각종 축제 및 체육행사를 개최 할 수 있는 다기능 주차장 조성으로 창선단항 대교타운 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 :  2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 창선면 대벽리 168-1번지 일원

○ 규 모 : 주차장 1식(A=18,666㎡,  주차면수:82면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :       5,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,400	900	1,542	922	2,036
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	1,346	0	0	0	1,346
시군구비	4,054	900	1,542	922	690
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

○ 2019년 4월 : 남해군 지방재정투자심사

○ 2020년 3월 : 부지매입 완료

□ 향후계획

○ 2020년 8월 : 남해군 관리계획 변경 결정

○ 2020년 9월 : 주차장 조성사업 착공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

남해읍 거점지역 공영주차장 조성사업

담당자

건설교통과 박봉인

(☎860-3454)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해읍 도심에 주차공간의 부족으로 기존 및 신설된 계획도로의 주차장화로 발생되는 교통혼잡을 해소

○ 남해읍 공동주택 신축급증, 관광객 증가에 다른 주차수요에 대응하여 공영주차장 조성이 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2022. 12.(2년간)

○ 위 치 : 남해군 남해읍 남변리 422-2번지 일원

○ 규 모 :  부지면적 A=2,392㎡, 주차면수 63면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,500	0	0	0	5,500
국 비	2,000	0	0	0	2,000
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	3,500	0	0	0	3,500
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10 %)

○ 2019년 10월 : 주차장 수급실태 조사 용역

○ 2019년 11월 : 남해군 투자심사 조건부 승인

□ 향후계획

○ 2020년 8월 : 국가균형발전특별회계 사업 신청

○ 2021년 1월 : 기본계획 및 타당성조사 용역

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

보물섬 남해 고사리밭 명소 조성

담당자

환경녹지과 이경재(☎860-3768)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬 +고사리+숲의 요소를 접목한 특색있는 산림문화휴양 공간 조성

○ 국내 최대 고사리 생산단지인 가인리 지역에 고사리밭 명소를 조성

주민소득 증대 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년)

○ 위 치 : 남해군 창선면 가인리 산34-1번지 일원

○ 규 모 : 27,529㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,700		200	1,000	1,500
국 비
시 도 비	1,350		100	500	750
시군구비	1,350		100	500	750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2019. 6. 18. : 보물섬 남해 고사리밭 명소 조성 기본계획 용역 완료

○ 2019. 7. 26. : 남해군 공유재산심의 완료

○ 2019. 7. 31. : 용역보고회 개최(용역비 22백만원/산림조합부산울산경남지부)

○ 2019. 11. 04 : 지방재정 군자체 투자사업 심의 완료

○ 2019. 11. 04 ~ 12. 06  : 감정평가 실시(4필지 30,272㎡) 우리감정 외 1

○ 2019. 12. 17 : 부지매입(1필지 10,653㎡/175,231,500원)

○ 2020.  03. 03. : 실시설계 계약(용역기간 3.9~5.17)

○ 2020.  04. 12. : 변경 사업대상지 토지소유자와 협의 완료

○ 2020.  04. 16  : 사업대상지 변경 매입계획 보고

○ 2020.  04. 22  : 2차 감정평가 실시(5필지 16,876㎡)

○ 2020.  05. 27  : 부지매입(5필지 16,876㎡)

○ 2020.  06. 26  : 재무과 계약의뢰

□ 향후계획

○ 2020. 08월 공사착공

○ 2021. 12월 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 사업대상 부지매입 협의가 되지 않아 대상지 변경으로 사업면적이  34,229㎡에서 27,529㎡ 변경 됨

사업명

공공급식지원센터 건립사업

담당자

유통지원과 정지은(☎860-3932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역생산 우수농축산물의 학교급식 식재료 납품으로 안전한 먹거리 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2020년

○ 위 치 : 남해군 이동면 다정리 958-1번지

○ 규 모 : 690㎡(사무동 180, 작업동 510)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,999		544	1,455
국 비
시 도 비	999.5		272	727.5
시군구비	999.5		272	727.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 먹거리통합지원센터 준공(※ 착공 : '19. 8월) : '20. 1월

○ 영업신고 및 사업자 등록                    : '20. 5월

○ 남해군 먹거리생산자회 전략품목 약정 체결 : '20. 7월

○ 식재료 공급 및 배송업체 선정               : '20. 7월

□ 향후계획

○ 먹거리통합지원센터 시범운영 (‘20년 9월 ~ )

□ 사업변경 내역

○ 해당없음