[별지 6]  개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

남해 고현 고령자복지주택

담당자

도시건축과 조영기(☎860-3488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 65세 이상 고령자 맞춤형 주택과 사회복지시설이 복합 설치된 영구임대주택사업으로 고령화시대에 노인주거시설 대책마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022~2026

○ 위 치 : 남해군 고현면 대사리 911-5번지 일원

○ 규 모 : 연립주택 2개동(4층), 영구임대주택 60호, 사회복지시설 1,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	19,400	0	0		19,400
국 비	8,100	0	0		8,100
시 도 비	-	-	-		-
시군구비	5,800	0	0		5,800
지 방 채	-	-	-		-
민간자본	-	-	-		-
기 타	5,500	0	0		5,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 실시설계 용역 진행중(LH에서 용역 추진)

○ 토지매입 관련 보상협의 추진예정

□ 향후계획

○ ＇23. 12. : 사업부지 토지보상협의 완료

○ ＇24. 04. : 실시설계 완료

○ ＇24. 09. : 공사 착공

○ ＇26. 04. : 입주 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 사업기간이 2022년부터 2024년까지 3년이었으나 공동시행자인 한국토지주택공사 측의 사업지연에 따라 2026년까지 사업기간 변경

사업명

남해 마늘한우 축제

담당자

농축산과 윤정인(☎860-3908)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 특산물인 남해 마늘과 한우의 우수성 홍보 및 소비시장 확대

○ 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 6. 10.(금) ~ 6. 12.(일)

○ 위 치 : 남해군 남해유배문학관 일원

○ 규 모 : 4개분야 60여개 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 597백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,248	-	597	651	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제17회 남해 마늘한우 축제 개최 및 정산 완료

사업명

직매장 지원사업

담당자

유통지원과 박성환(☎860-3912)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농축산물을 직거래로 상시적 운영이 가능한 직매장 설치를 지원함으로써

직거래활성화 유도 및 사회적가치 확산

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년

○ 위 치 : 경남 남해군 남해읍 평리 1222

○ 규 모 : 로컬푸드 복합센터 신축(826㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,443백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,443	-	-	1,443	-
국 비	289	-	-	289	-
시 도 비	173	-	-	173	-
시군구비	404	-	-	404	-
지 방 채		-	-	-	-
민간자본	577	-	-	577	-
기 타		-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 사업계획 변경승인(농림부) : ‘22. 5.

○ 로컬푸드 복합센터 실시설계 완료 : ’23. 5.

□ 향후계획

○ 로컬푸드 복합센터 인허가 완료 : ‘23. 8.

○ 로컬푸드 복합센터 착공 및 준공 : ‘23. 11. ~ ’24 . 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업내용 및 사업비 변경

변경사항	당 초	변 경	비 고
사업내용	복합문화센터 신축	내부인테리어, 기계장비 구입	건축비용은 농협 자부담
사업비	2,200백만원	1,443백만원	△757백만원

○ (변경사유) 당초 단독형태 로컬푸드 복합문화센터 건립에서 금융업소, 하나로마트, 한우프라자 등을 포함하는 연계시설물 건립으로 변경

사업명

국제탈공연예술촌 공연예술제

담당자

문화체육과

홍승완(☎860-3790)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2022년 남해군 방문의 해 관광수요 창출

○ 관내 문화관광시설 운영 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 5월~2022년 11월

○ 위 치 : 남해탈공연박물관 일원(이동면 남해대로 2412)

○ 규 모 : 공연예술제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 293백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	293	-	121	72	100
국 비
시 도 비
시군구비	293	-	121	72	100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  40%)

○ 2022년 공연예술제 개최(5월, 11월) 완료

○ 대중공연 1회, 공연예술 3회 개최 및 입장객 추산 700여명

□ 향후계획

○ 지속적인 공연예술제 개최를 통한 남해 유일의 공연예술행사로서 관내        문화예술역량 강화에 기여

○ 남해탈공연박물관의 공연예술 전문 시설로서의 활성화 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

고현 생활체육관 건립

담당자

문화체육과 황민화(☎860-8663)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체육시설이 부족한 고현면의 인프라 확충을 통한 주민의 건강과 삶의 질 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 4. ~ 2024. 11.

○ 위 치 : 고현면 대사리 706번지 일원

○ 규 모 : 부지조성 3,045㎡, 연면적 863.47㎡

- 다목적체육관(694.69㎡), 사무실, 화장실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,160백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,160	-	630	870	1,660
국 비	1,000	-	200	800	-
시 도 비	140	-	70	70	-
시군구비	2,020	-	360	-	1,660

□ 추진상황(기본 및 실시설계 용역 중, 진척률:10%)

○ 2022. 4. : 지방재정투자심사(군)

○ 2022. 6. : 토지보상(매입) 완료(4필지, 3,045㎡)

○ 2023. 1. : 공공건축심의 완료(원안가결)

○ 2023. 2. : 기본 및 실시설계 용역 개찰(동성건축사사무소)

○ 2023. 3. ~ 4. : 지질조사 용역

○ 2023. 3. ~ 8. : 기본 및 실시설계 용역

□ 향후계획

○ 2023. 10. : 각종 인허가(건축협의, BF, 제로에너지, 신재생에너지 등)

○ 2023. 11. : 공사 착공

○ 2024. 11. : 공사 준공 및 시설 운영

□ 사업변경 내역

구분	당초계획	사업추진
사업명	고현 생활체육관 건립	고현 생활체육관 건립
위 치	남해군 고현면 대사리 706번지 일원	좌동
사업기간	2022. 1. ~ 2023. 12.	2022. 4. ~ 2024. 11.
사업비	2,500백만원(국 1,000, 도 100 군 1,400)	3,160백만원(국 1,000, 도 140, 군 2,020)
사업내용	다목적체육관 조성 1식	좌동

사업명

제10회 독일마을 맥주축제

담당자

관광진흥과 윤성찬(☎860-8603)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해군의 대표관광지인 독일마을에서 맥주축제 ‘옥토버페스트’를 개최해

남해군을 알리고 새로운 성장동력 확보

○ 그동안의 노하우를 결집해 주민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 축제개최

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.5.1.~2022.11.15. (축제기간 : 2022.9.30.~10.2.)

○ 위 치 : 남해군 독일마을 일원

○ 규 모 : 거리퍼레이드, 유럽식 무대공연, 체험행사 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :    306백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	304		304
국 비
시 도 비	36		36
시군구비	268		268
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100 %)

○ 독일마을 거리퍼레이드 등

○ 개막 퍼포먼스 및 유럽 문화공연

○ 방문객이 직접 즐길 수 있는 참여 프로그램 운영

□ 향후계획

○ 2022년 제10회 독일마을맥주축제 개최 완료

○ 2023년 제11회 독일마을맥주축제 개최 준비

※ 축제기간 : 2023.10.6.(금)~10.8.(일)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 별도 변경사항 없음

사업명

청정어장 재생사업

담당자

해양발전과 최상준(☎860-3377)

□ 사업목적 및 필요성

○ 과밀 노후화된 어장 및 주변해역을 대상으로 오염퇴적물 제거 등 어장환경      개선을 추진하여 지속가능한 어장환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ～ 2025년(5년간)

○ 위 치 : 남해군 강진만 해역 일원

○ 규 모 : 청정어장재생(3,000ha)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	15,000	2,500	2,500	5,000	5,000
국 비	7,500	1,250	1,250	2,500	2,500
시 도 비	1,500	250	250	500	500
시군구비	6,000	1,000	1,000	2,000	2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ '21. 09월 : 사업 대상지 확정(경남도)

○ '21. 09월 : 주민 설명회 개최

○ '21. 12월 : 한국어촌어항공단 위수탁계약 체결

○ '22. 03월 : 1구역 역량강화사업 착수

○ '22. 11월 : 1구역 어장정화사업 착수

○ '22. 12월 : 1구역 진단 및 개선용역 착수

○ '23. 01~05월 : 2차 사업 실시설계 협의(경남도)

○ '23. 05월 : 2구역 역량강화사업 착수

○ '23. 06월 : 1구역 어장정화사업 완료

□ 향후계획

○ '23. 06~12월 : 2차 사업 추진

○ '24. 02월 : 3차 사업 공모신청 추진

사업명

다가치키움센터 건립

담당자

주민행복과 전정현(☎860-3848)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군내 아동과 영·유아에 대한 종합적이고 체계적인 돌봄 기능을 수행할 수       있는 공간이 부족한 실정임

□ 따라서 군 돌봄복합공간 기능 및 보육 중앙제어 역할 수행을 위한 거점기관으로‘남해군 다가치키움센터’건립 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 남해읍 아산리 426-3번지외 1필지

○ 규 모 : 지상 3층 /연면적 1,710㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,350백만원(군비 850, 기금 7,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,350	-	-	1,850	5,500
국 비
시 도 비
시군구비	850	-	-	850	-
기 타 (지방소멸대응기금)	7,500	-	-	1,000	6,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ 지방재정투자심사 심의 완료                :‘22. 10월

○ 기본계획 수립용역 발주                    :‘23. 2월

○ 부지매입 및 등기완료                         :‘23. 3월

○ 주민의견 수렴(설문조사, 주민설명회)            :‘23. 4월

○ 공공건축 사업계획 사전검토 완료            :‘23. 7월

□ 향후계획

○ 설계공모 관리용역 발주                    : ‘23. 7.

○ 공유재산 심의 및 공유재산관리계획 의회 승인     : ‘23. 7.

○ 기본 및 실시설계                          : ‘23. 9. ~‘24. 2.

○ 공사 착공 및 준공                         : ‘24. 4. ~‘25. 10.

○ 시험 운영 및 운영계획 보안                : ‘25. 11. ~‘25. 12.

○ 개관 및 운영                              : ‘26. 1.

사업명

남해 IT 코워킹 플랫폼 조성사업

담당자

핵심전략추진단 김은영(☎860-8838)

□ 사업목적 및 필요성

○ 코로나19 상황의 장기화로 프로그램을 기획하고 아이디어를 창출해야 하는 (IT)기업의 원격 및 재택근무 등 다양한 근무형태 수요에 따라 선제적 대응 필요

○ 지역자원과 연계 IT기업과 디지털 노마드에게 일과 휴식의 병행이 가능한 사무‧주거 공간 제공

○ 청년이 선호하는 IT기업과의 네트워크 교류 확대로 관계인구 형성 및 지역 활력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 3. ~ 2023. 12.(1년 9개월)

○ 위 치 : 남해군 이동면 신전리 733 일원

○ 규 모 : 위치 내 면적 1,860㎡ 범위에서 기존 병영막사 5동 철거(철거공사 별도) 후 코워킹스페이스 신축, 주거공간 정비

- (사무공간) 개방형 코워킹 스페이스 조성, 566㎡

- (주거공간) 펜션동 리모델링, 주거공간 조성, 390㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	20	0	20	0	0
국 비 (지방소멸대응기금)	0
시 도 비	10		10
시군구비	10		10
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2022. 3월 : 남해 IT 코워킹 플랫폼 조성 계획 수립(앵강다숲)

○ 2022. 5월 : 운영 및 리모델링 방안 컨설팅 용역

○ 2022. 8월 : 설계공모 관리 용역 시행

○ 2022. 9월 : 공공건축 심의회 개최(원안 가결)

○ 2022. 11. : 중기지방재정계획 반영

○ 2022. 11. : 지방재정 투자심사

○ 2022. 11. : 공유재산 관리 계획 변경

○ 2022. 11. ~ 2023. 7월 : 실시설계 시행

□ 향후계획

○ 23년 7월 : 계약삼사(도)

○ 23년 7월 ~ 12월 : 건축공사 시행

○ 24년 1월 : IT 코워킹 플랫폼 운영 개시

사업명

면소재지 지하시설물 전산화 5개년사업

담당자

민원지적과 서재희

(☎860-3013)

□ 사업목적 및 필요성

○ ‘94년부터 아현동 가스폭발, 대구지하철 참사, 씽크홀 등으로 지하시설물 안전관리 강화

○ 전산화가 되어 있지 않아(수기대장 관리) 정확한 위치파악 애로 및 한전 등  유관기관의 데이터 확보 지연으로 신속한 대처 어려움

○ 재난안전사고 대비 군민안전과 재산보호 위한 통합된 시스템 구축운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 1월 ～ 2027년 12월(5년)

○ 위 치 : 경상남도 남해군 면소재지 일원

○ 규 모 : - 공공기준점 설치/측량 : 100점(4급)

- 도로시설물 조사/측량 : 10.057㎞

- 상수도 조사/탐사 : 125.000㎞(조사 106.000㎞/탐사 19.000㎞)

- 하수도 조사/탐사 : 114.200㎞(조사 110.000㎞/탐사 4.200㎞)

- 공공측량 성과심사 및 전산화 DB구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,660백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,660	1,510	150	400	1,600
국 비	912	912
시 도 비	182	182
시군구비	2,566	416	150	400	1,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2019년~2021년 : 남해군 지하시설물 전산화사업(남해읍)

○ 2022년 : 남해군 지하시설물 전산화 확산사업(이동면)

○ 2023년 : 남해군 지하시설물 전산화 확산사업(창선면, 서면)

□ 향후계획

○ 2024년~2027년 : 남해군 지하시설물 전산화 확산사업(미구축지역 대상)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

송정관광지 전망대 및 주차장 조성사업

담당자

관광진흥과 강영후(☎860-8654)

□ 사업목적 및 필요성

○ 송정관광지 내 설리 스카이워크와 연계한 덕야산 전망대 및 주차장 조성으로 신규 관광루트를 확보하고 관광객 유입을 통한 지역주민 소득증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ~ 2024년

○ 위 치 : 경상남도 남해군 미조면 송정리 산352-14번지 일원

○ 규 모 : 9,979㎡ (전망대 6,178㎡ 주차장 3,801㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,300	-	-	700	1,600
국 비	900	-	-	100	800
시 도 비	270	-	-	30	240
시군구비	1,130	-	-	570	560
지 방 채		-	-
민간자본		-	-
기 타		-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공정 0%)

○ 2022. 5. 송정관광지 전망대 및 주차장 조성 기본계획 수립용역 완료

○ 2022. 8. 2023년 관광자원개발 균특전환사업 신청

□ 향후계획

○ 2023. 1. ~ 7. 조성부지매입

○ 2023. 6. 실시설계 용역 발주

○ 2024. 1. 전망대 주차장 조성공사 착공

○ 2024. 10. 전망대 및 주차장 조성공사 준공

○ 2024. 12. 시설운영

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

대한야구캠프 부지매입

담당자

문화체육과

김영근(☎860-8682)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해⇔여수 해저터널 개통 시 관광수요 증가와 관광 트렌드 변화에 대비한 스포츠파크 리뉴얼사업 추진

○ 전지훈련 야구장 활용 및 인프라 확충을 통한 지역사회 인구 유입 및 고용효과 창출효과가 기대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 1월

○ 위 치 : 남해군 서면 서상리 1182-3번지외 5필지(잡, 56,454㎡)

○ 규 모 : 56,454㎡ 토지 및 건물매입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,400	-	-	8,400	-
국 비
시 도 비				0
시군구비	8,400	-	-	8,400	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ '22.  7.  : 대한야구캠프 소유자(한동주) 매매 협의완료

○ '22. 10.  6.  : 공유재산심의회 심의

○ '22. 11.  2.  : 의원간담회

○ '22. 11. 29.  : 공유재산관리계획 승인(의회)

○ '23.  1. 12.  : 등기 및 대금지급(근저당권 해지 포함)

□ 향후계획

○ 대한야구캠프 인조잔디야구장 정비 후 전지훈련 및 야구대회 개최

○ 맨땅 야구장에 대하여 한시적 파크골프장 이용

○ 웰니스 스포츠파크 조성사업 기본계획 수립 후 대한야구캠프 정비

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

제44회 대한축구협회장배 전국 고교 축구대회

담당자

문화체육과 지호진(☎860-8683)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국단위 대회 개최를 통한 고등부 축구 발전과 선수기량 향상

○ 대회유치를 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 5. 6. ~ 5. 18. [13일간]

○ 위 치 : 스포츠파크일원

○ 규 모 : 프로산하(고등부 축구) 22개팀 900여 명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 145백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	145	-	-	145	-
국 비
시 도 비
시군구비	145	-	-	145	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 대회 유치 신청 및 승인(대한축구협회)

○ 협약체결(남해군·남해군체육회↔경남축구협회)

○ 보조금 교부신청(보조단체)

○ 보조금 교부결정 및 교부통지(보조단체)

○ 사업 정산

□ 향후계획

○ 전국대회를 유치를 위해 스포츠마케팅 강화

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

제1회 남해보물섬 전국 초등학교 축구대회

담당자

문화체육과 지호진(☎860-8683)

□ 사업목적 및 필요성

○ 축구 꿈나무들의 기량향상과 성장계기 마련

○ 전국 유소년 축구대회를 개최하여 축구클럽의 활성화 및 저변확대 기여

○ 대회유치를 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 2. 18. ~ 2. 24. [7일간]

○ 위 치 : 스포츠파크일원

○ 규 모 : 전국 초등부 56개팀 1,600여 명(u-11 24팀, u-12 32팀)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 110백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	110	-	-	110	-
국 비
시 도 비
시군구비	110	-	-	110	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 대회 유치 신청 및 승인(대한축구협회)

○ 협약체결(남해군·남해군체육회↔경남축구협회)

○ 보조금 교부신청(보조단체)

○ 보조금 교부결정 및 교부통지(보조단체)

○ 사업 정산

□ 향후계획

○ 전국대회를 유치하기 위해 스포츠마케팅 강화

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

보물섬 남해FC 클럽하우스 건립공사

담당자

문화체육과

김영근(☎860-8682)

□ 사업목적 및 필요성

○ 저출산·고령화로 폐교 위기에 처한 농어촌 학교살리기 및 운동선수 육성의 대안적 공간확보로 인구소멸위기 극복

○ 초·중·고 연계시스템 도입으로 유소년의 체계적인 선수 육성, 경쟁력 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 9월 ~ 2025년 12월

○ 위 치 : 남해군 서면 서상리 1182-8 (구)수영장

○ 규 모 : 지상 4층, 연면적 2,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,800	-	-	8,960	840
국 비
시 도 비	3,960	-	-	3,960	-
시군구비	5,840	-	-	5,000	840
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ '22. 8. 22 : '22년,'23년 지방소멸대응기금 투자계획 반영사업 확정

○ '22.9.1.~12.14. : 공공건축물 건축기획 용역시행 [(주)양지]

○ '22.9.6.~10.28. : 사업계획 사전검토 완료(경남도 공공건축지원센터)

○ '22. 10. 6. : 공유재산 심의회 심의완료

○ '22. 10. 17. : 지방재정 투자심사 완료(경남도)

○ '22. 11. 23. : 공유재산 관리계획 부결(위치 부적정)

○ '23.  2. 13. ~ 6. 5. : 공공건축물 건축기획 용역 재시행 [(주)양지]

○ '23.  3.  9. : 클럽하우스 건립 위치 선정(안)보고 (군의회)

○ '23.  3. 28. : 공유재산심의회 변경심의 완료

○ '23.3.20. ~ 4.20. : 사업계획 사전검토 완료(경남도 공공건축지원센터)

○ '23.5.12. ~ 9. 8.  : 설계공모 관리용역

○ '23.5.17. ~ 6.25. : (구)수영장 건축물 철거공사 실시설계용역(완료)

○ '23.  6.  5.  : 공공건축심의위원회 심의(남해군)

○ '23.  6.  7. : 공유재산 관리계획 승인

□ 향후계획

○ '23.  7.  : (구)수영장 건축물 철거공사 및 건설폐기물처리

○ '23.  8.  : 설계공모작 선정

○ '23.  9.  : 실시설계용역 계약 및 착수

○ '23. 12.  : 장애인편의시설·녹색건축물 인증 등 행정절차 이행

○ '24.  2.  : 경상남도 실시설계 계약심사

○ '24.  3.  : 공사 입찰 및 계약

○ '24.  4.  : 공사착공

○ '25. 12.  : 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 변경

- 물가상승에 따라 건물연면적 축소 : 연면적 3,574.95㎡ ⇒ 2,000㎡

□ 추진사항

❍ 2022. 10.  6. : 공유재산심의회 심의완료

❍ 2022. 11.  2. : 의원 간담회

❍ 2022. 11. 14. : 지방재정 투자심사(자체) 완료

❍ 2022. 11. 29. : 공유재산관리계획 승인(의회)

❍ 2023. 1. 12. : 등기 및 대금지급(근저당권 해지 포함)